공간의 효율적 이용을 위한

공간 재배치 사업 인테리어

설계용역 과업지시서

____________________________

동탄복합문화센터

2019. 06.

	- 01 -

▣ 목 차		01 과업개요 ❘03 02 과업지시서 ❘07 03 관련서식 ❘24

00

목차

	- 01 -

□ 과업의 명칭

01

과업개요

본 과업의 명칭은 화성시문화재단 동탄복합문화센터『공간의 효율적 이용을 위한 공간 재배치 사업 인테리어 설계용역』이라 한다.

□ 과업의 목적

본 과업은 동탄복합문화센터 내의 한정된 공간에 비해 시민의 문화예술 활동 수요가 증가하고 있어 센터가 갖고 있는 문화예술 본래의 기능에 맞게 공간을 재배치하여 시민의 문화예술 활동 장려 및 업무의 효율성을 제고하고자 실시하는 사업이다.

□ 과업대상 건축물 개요

1. 건물 개요

대지주소	경기도 화성시 노작로 134
대지면적	41,251㎡(12,478평)
연 면 적	28,674㎡(8,673평)
건축규모	전체 지하2층, 지상 3층
주 용 도	문화집회시설(공연장), 관광휴게시설(야외음악당), 수련권시설(수련관), 운동시설, 교육연구시설(도서관), 노유자시설(어린이집)
사업범위	Project 1	942㎡(285평)
	Project 2	1,155㎡(349평)
	합 계	2,097㎡(634평)

2. 과업대상 면적

사업별	층	용도		면적	비고
		당초	변경
Project 1	B1F	반석아트홀 로비 (참여형 문화복합 공간 조성)		942㎡(285평)
Project 2	B1F	방재실 (내부 장비의 이동배치 및 환기설비, 탕비실, 숙직공간 설치 등의 근무환경 개선공사)		63㎡(19평)
	M1F	화성예총	커뮤니티 시설	70㎡(21평)
		창의문화팀
		감사팀	강의실 (예정)	97㎡(29평)
		비서실
		대표 이사실
	M2F	키즈카페	통합사무실	734㎡(222평)
	3F	축제추진팀	예술/문화단체 사무실 (예정)	131㎡(40평)
		문화사업팀
		문화국장실
	야외공연장 2F	공연사업팀	사무실 (예정)	60㎡(18평)
	소 계			1,155㎡(349평)

□ 과업의 기간

1. 본 과업의 총기간은 착수일로부터 50일(예정기간: 설계 Project 1 40일, Project 2 30일, 공사완료 후 준공처리 Project 1 10일, Project 2 10일)로 하되, 설계완료 후 발주처의 공사 발주업무 등에 소요되는 기간은 과업기간에서 제외한다.

▣ 예상 사업일정

① 설    계: Project 1 2019년 7월 ~ 2019년 8월(40일)

Project 2 2019년 7월 ~ 2019년 8월(30일)

(Project 1과 Project 2는 별도의 인원 구성을 통한 개별 과업으로 진행한다.)

② 공사발주: Project 1 2019년 9월 ~ 2019년 10월

Project 2 2019년 8월 ~ 2019년 10월

③ 공사착공: 2019년 10월 중

④ 공사준공: 2019년 12월 중

※ 일정은 발주처의 내부사정 및 인테리어공사 준공일정 등에 따라 변동 가능

2. 설계업무는 내부 공간디자인, 기본설계, 실시설계로 구분하고 내부 공간디자인 기간은 계약 체결일로부터 10일, 기본설계 기간은 계약 체결일로부터 15일 이내로 한다. 다만, 관계법령 및 발주처의 사정에 의한 지연사유 발생 시 발주처와의 협의를 통하여 과업기간을 조정할 수 있다.

① 공간디자인: 계약 체결일로부터 10일 이내 디자인 보고서 최종 승인이 이루어 질수 있도록 진행 한다.(디자인 보고서 승인 후 기본설계 진행)

② 기본설계: 계약체결일로부터 15일 이내 기본설계(안)을 제출(2개 이상)하고 발주처의 승인을 득한 후 실시설계 실시

③ 실시설계: 계약 체결일로부터 15일 이내 실시설계도서 제출

3. 과업수행 완료 전(후)라도 과업수행과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 과업수행 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.

□ 과업의 범위

1. 인허가 업무의 범위

1) 사업의 원활한 진행과 준공을 위한 관련기관 협의와 각종 인허가, 사용승인 신청 대행 및 인테리어공사 완료 후 동탄복합문화센터 현재 사용현황에 따른 건축물대장 정리등의 인허가 관련 행정절차 일체

2) 인⋅허가를 위한 각종 인증 및 심의 관련 협의와 서류 작성⋅제출 등의 업무

3) 관련법령 검토와 본 건물 유지관리지침상 협의 인허가에 필요한 서류 작성⋅제출 등의 업무

2. 설계 업무의 범위

1) 설계 업무의 범위는 내부 공간디자인, 기본설계 및 실시설계, 준공도서 검수와 승인, 관련법령에 의한 사용승인 신청 서류작성 등을 포함한다.

2) 다음 사항을 설계의 기본 과업으로 한다.

① 공간디자인: Project 1의 반석아트홀 로비 내부 공간디자인 등

② 인테리어 설계: 본 건물의 금회 사업해당 범위에 대한 인테리어 설계 등

③ 사인물, 가구 및 집기 디자인 계획:

실별⋅기능별 특성에 맞는 사인물과 주문형 가구와 이동형 가구 디자인 및 사례 분석에 의한 이용자 효율 증대를 위한 가구⋅집기 선정의 방향성 제시

④ 전기설비 설계: 금회 사업해당 범위의 전기설비 전반에 대한 설계(무대조명 설계포함)

⑤ 기계설비 설계: 금회 사업해당 범위의 기계설비 전반에 대한 설계

⑥ 정보통신 설계: 업무시설 구내통신망, A/V시스템, CCTV설비, 출입통제시스템, IPTV, 무대음향 시스템 등

⑦ 소방설비 설계: 소방시설공사업법과 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 소방 설계

⑧ 건물 유지관리상 필요한 시설 설계,｢장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률｣에 따른 장애인 편의시설 설계 등

⑨ 본 공사와 관련있는 관계법령에 위배됨이 없도록 한다.

- 건축법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계 령⋅규칙

- 전기사업법, 전기공사업법 및 관계령⋅규칙, 전기설비기술기준

- 대한전기협회 발행 내선규정 및 배전규정

- 전기통신기본법, 전기통신설비의기술기준에 관한 규칙

- 소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

- 산업안전보건법 및 관계령 규칙

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 한국전력공사의 전기공급 고객약관

- 전기용품안전관리법 및 관계령, 규칙

- 기타 본 공사와 유관한 제반 법령 및 규정 등

3) 2)번의 기본업무 및 관련법령에 의한 업무 외 다음과 같은 업무가 용역수행자의 업무에 포함된다.

① 과업대상 건축물의 현장조사 및 검사, 보고서 작성 ․ 제출에 관한 업무

② 시공사 선정을 위한 입찰행정 지원업무(입찰서류일체 작성포함)

③ 용역수행자는 설계기간이나 공사 진행 중 현장 여건에 따라 설계도서 및 디자인의 수정이 필요할 경우 디자인 및 설계책임자, 감리, 감독관 입회하에 즉각적인 현장 확인 후 검토와 수정이 가능토록 디자인 및 설계 프로그램의 구동이 가능한 고사양의 휴대용 전자기기(NT950SBE-X716 동등이상)를 구매하여 현장에서 항시 휴대하고 업무에 임하도록 하며 사업 완료 후 발주처에 인수인계토록 한다.

④ 인테리어 공사 진행 시 내부 공간디자인 의도가 정확히 반영될 수 있도록 철저히 확인 관리토록하며, 문제점 발생 시 즉시 수정·보완 도면을 작성하여 발주처에 보고한다.

⑤ 해당 공사 중 사후설계 관리업무(현장 상황에 맞는 설계도서 지원 포함)

⑥ 실시설계는 시공 가능한 세부적인 공사비 산정을 포함한다.

⑦ 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항과 발주기관이 설계완수를 위하여 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

제1장 과업 일반사항

02

과업지시서〔설계부분〕

□ 과업수행의 기본방향

1. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 관련 법규, 조례 등과 발주기관의 별도의 지시사항이나 특기사항이 없는 한 본 과업지시서에서 제시한 내용을 원칙으로 한다. 단, 이의가 있을 경우 용역수행자 임의로 판단할 수 없으며, 발주처와 협의⋅확인 후 수행한다.

2. 본 과업지시서의 내용에 대한 대안은 제시될 수 있으며, 이때는 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 시 채택될 수 있다.

3. 용역수행자는 발주처에서 제시하는 추정공사비 범위 내에서 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행한다.

4. 용역수행자는 금회 공사예정 위치에 대한 현지조사, 구조물 조사, 관련 계획 및 자료를 수집 ․ 분석하여 설계 진행 여부를 결정하여야 하며, 조사결과 설계 불가능한 요소 발견 시에는 발견 즉시 발주처에 보고하도록 한다.

5. 용역수행자는 발주처가 예측할 수 없었던 상황이 발생할 경우 즉시 발주처와 협의 후 과업을 수행한다.

6. 장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 적법하게 설계하여야 한다.

□ 용역수행자의 업무수행

1. 용역수행자는 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당공사에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등의 사업계획을 수립하여 최상의 설계가 되도록 하여야 한다.

2. 용역수행자는 발주처의 승인 없이 과업의 범위⋅내용 등을 임의로 변경할 수 없고, 발주처가 필요하다고 지시하는 각종 조사자료 수집 및 시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

3. 법률 준수의 의무

용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 건축 관계법, 소방법, 통신법, 건설기술관리법, 전력기술관리법 기타 관련법과 각종 기준 및 지침을 준수하여야 하며, 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 계약상대자가 책임을 져야 한다.

4. 인테리어, 전기설비, 기계설비, 정보통신설비, 소방설비 등 공종별로 분리하여 작성하되, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

5. 안전관리 및 품질관리 등에 대하여 해당 규모에 적정한 내용을 시방서에 명기하고 필요한 비용을 내역에 반영한다.

6. 용역수행자는 현지 과업수행을 표시하는 사진 및 과업수행 기록을 유지하고 이를 제출하여야 하며, 과업수행 중 또는 설계 성과물 제출 후에도 설계내용에 관하여 일체의 보안유지에 책임을 진다.

7. 책임 및 하자

1) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주처와 협의사항 등을 만족하여야 한다.

2) 용역수행자는 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약문서 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이한 점을 발견할 경우 즉시 발주처에 통보하고 협의한다.

3) 용역수행자는 제출한 설계도서 일체에 대한 책임이 있으며, 시공도중 설계도서가 현장에 부합되지 않을 경우 발주처의 요구에 따라 현지조사 및 시험을 시행하고, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.(계약상대자의 귀책사유가 아닌 경우는 제외한다)

8. 설계관련 업무협조

1) 용역수행자는 설계용역이 완료된 후 공사 시공 과정에서 설계도서의 해석, 자문, 현장여건 변화 등에 따른 검토⋅보완 등이 요구될 경우에는 용역자 부담으로 최대한 협력하여야 한다.

2) 또한 공사 준공 후 유지관리 과정에서 특별히 설계 자문, 현장여건 변화 및 변경에 대한 검토⋅보완 등에 대하여 협력하여야 한다.

3) 설계지침의 유권 해석: 본 과업지시서의 해석상 다툼이 있을 경우 유권해석은 우리재단이 한다.

9. 설계 하자로 인한 보상

용역수행자는 준공 후 설계상의 불완전으로 인해 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 발주처에 피해(인명피해, 금전상의 손실 등)를 초래하였을 때에는 계약기간을 불구하고 계약상대자는 이에 대한 변제 및 민⋅형사상 책임을 진다.

10. 설계용역비

1) 계약체결 후 설계용역비 산출 시 중대한 하자가 있었음이 발견되었을 경우, 발주처는 계약된 용역비를 감액 조치할 수 있다.

2) 계획의 조정으로 인해 물량이나 공사비가 경미하게 증가된 경우 계약상대자는 이에 대한 설계용역비 증액을 청구할 수 없다.

3) 설계용역 과업수행 중 발주처에서 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구하는 경우, 계약상대자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이를 이행한다.

4) 발주처는 과업지시서의 내용에 포함되지 않았으나 사업 진행을 위해 필요하다고 인정되는 부분은 별도의 추가 과업을 지시할 수 있다.

5) 설계용역대가의 지급은 아래와 같이 정하되 발주처의 예산상황 및 사업여건에 따라 지급시기 및 비율을 조정할 수 있다.

① 실시설계도서 납품 및 관련 인⋅허가 완료 : 70%(누적 진행률 : 70%)

② 관련 인테리어공사 준공 및 사용승인 완료 : 30%(누적 진행률 : 100%)

11. 납품 및 검수

최종 실시설계도서는 발주처가 충분히 검수할 수 있도록 계약납품 7일 전에 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 수정 또는 변경사항이 있을 경우에는 즉시 수정 조치하여 계약 납품일까지 납품한다.

12. 계약의 해제⋅해지 또는 일시정지

설계용역 계약체결 후 용역수행 중 다음의 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부(일부)를 해제⋅해지 또는 일시정지 할 수 있다.

1) 정당한 이유 없이 약정한 기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 않을 경우

2) Project 1과 Project2의 독립적 진행을 위한 Project별 투입 인력 계획에 따른 적절한 설계인원이 투입되지 않을 경우

3) 용역수행자의 귀책으로 인하여 용역수행기한까지 당해 용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우

4) 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법⋅부정행위가 있는 경우

5) 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

6) 과업지시서(계약체결 후 제시하는 제반 자료 포함)의 내용과 발주처의 정당한 지시를 계약상대자가 고의 또는 임의로 이행하지 않을 경우

7) 정당한 사유 없이 발주처의 지침에 따르지 않고 계약상대자 단독의 주장으로 발주처와 최종합의가 이루어지지 않음으로써 과업수행에 지장을 초래한다고 판단될 경우

8) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

9) 제3자에게 일괄 하도급의 적발 시.

10) 기타 발주처의 필요에 의하여 지시한 경우

13. 설계도서 보완⋅수정

완성된 설계도서 중 제반법규 및 규정에 지적되는 상황이 발생될 시에는 이의 없이 보완⋅수정하여야 한다.

□ 관련기관 인⋅허가 및 협조

1. 용역수행자는 본 과업과 관련된 관계기관 인⋅허가 및 심의사항이 있을 시 이를 설계기간 중 완료하여야 한다.(건축, 소방 및 간판 등)

2. 용역수행자는 설계도서 납품 전 에너지이용 합리화⋅중소기업제품 우선구매, 사전규격 심사 등 관련법규에 의한 협의 등이 필요한 경우 이를 반영한 후 납품하고, 이와 관련된 일체의 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3. 용역수행자는 용역 예정공정표상의 공정이 10%이상 지연될 경우 그 사유 및 대책을 강구하여 문서로 발주처와 협의하여야 한다.

□ 기타

기타사항은 별도의 계약조건 및 용역계약 일반조건에 의하며, 여기에 명기되지 아니한 사항은 관계 법률에 의하되 법률에 명기되지 아니한 사항은 발주처의 해석에 따라야 한다.

□ 설계용역 손해배상보험(공제) 가입

1. 용역수행자는『설계⋅건설사업관리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부 고시 제2017-219호, 2017.4.11.)』에 따라 설계용역 손해배상보험 또는 공제에 가입하고 증서사본을 용역완료 전까지 우리재단에 제출하여야 한다.

2. 보험 또는 공제 가입 시 하수급인을 포함하여 피보험자 또는 공제자로 하여야 한다.

다만, 제3자의 재산상의 손해와 관련하여 발주청에 법률상의 배상책임이 있는 경우에는 발주청을 피보험자 또는 공제자에 추가로 포함될 수 있도록 하여야 한다.

3. 보험 또는 공제의 가입기간은 건설공사의 착공일로부터 완공일까지의 기간으로 한다.

다만, 보험 또는 공제의 가입기간 설정이 곤란할 경우에는 특약에 의하여 추후 통보하는 조건으로 보험 또는 공제가입기간을 설정할 수 있다.

4. 보험 또는 공제가입시 금융위원회에 제출⋅신고한 설계⋅감리 등 용역손해배상보험약관 또는 이와 동일수준 이상으로 보장된 공제약관을 사용하여야 한다.

5. 용역수행자는 다음 각호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1) 보험 또는 공제에 가입한 용역의 손해발생방지를 위하여 위험관리에 대한 신의와 성실의 원칙에 따라 선량한 관리자로서의 주의의무를 성실히 이행하여야 한다.

2) 보험 또는 공제가입과 관련하여 용역수행자가 행하여야 할 손해보험회사 또는 공제조합 등에 대한 고지 또는 통지를 하여야 한다.

3) 보험 또는 공제에 가입한 용역에 대하여 손해보험사 또는 공제조합 등의 조사에 대한 협조 및 이들로부터 제출된 위험도조사보고서(Risk Survey Report)에 따른 적절한 위험방지 조치를 하여야 한다.

4) 보험 또는 공제사고 발생 시 구체적인 사고경위 등을 지체 없이 발주청에 통보하여야 한다.

□ 하도급의 범위

1. 용역수행자는 발주처로부터 도급 받은 설계용역을 제3자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2. 용역수행자는 발주처가 필요하다고 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며 하도급과 관련된 업무에 대하여 모든 책임을 진다.

□ 설계 변경

1. 발주처는 다음의 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 용역수행자는 이에 따라야 한다.

1) 기본계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위 변경 시

2) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 용역수행자 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 변경

4) 기타 발주처에서 설계변경의 필요하다고 판단할 시

2. 조정대상

1) 설계용역 과업내용 중 연면적의 10%이상 증감이 발생한 경우, 계약금액을 기준으로 산정한 단위면적당 금액으로 10%이상 증감 면적에 대해 정산할 수 있다.

2) 1)번에 해당하지 않는 설계변경(계약내용 변경 등 포함)의 경우 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 및 본건 용역 계약서 상 ｢용역비 산출근거｣, ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 및 대가기준｣ 등에 따라 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

3) 조정대상 제외

① 법규, 지침위반 등 설계자의 설계 오류에 의한 과업

② 대안수립 등 설계과정상의 조정, 검토를 위한 과업

③ 색채계획, 자재검토서 등 도면이 아닌 보고서 형태로 표현된 용역

④ 인⋅허가 추진 및 조건 이행을 위한 과업

단, 발주처 사유로 인한 변경은 제외되며 기타 사항은 협의 후 결정한다.

□ 각종 제출서류

1. 용역수행자는 계약일로부터 3일 이내에 발주처에 착수계(과업수행계획서 포함)를 작성⋅제출하여 승인을 득하여야 한다.

1) 착수계 : 용역명, 계약금액, 계약년월일, 착수년월일, 완수년월일

2) 과업수행계획서 : 각 Project별 설계용역업무 책임기술자(총괄책임자)와 각 전문분야별 책임자를 지정하고 체계적인 업무수행을 위하여 다음 내용이 포함된 용역수행계획서를 각 1부씩 제출한다.

① 각 관련주체(인테리어, 전기설비, 기계설비, 정보통신, 소방설비 등) 간의 업무와 책임

② 총괄 및 분야별 책임기술자 선임계

- 공인기관(각종 전문협회 등)에서 발행하는 경력증명서 원본

- 재직증명서(발주공고 3개월 이전 입사자)

- 국가기술자격증 사본

③ 단계별 용역수행계획서의 내용(과업지시서 용역범위 참조)

④ 참여기술자 조직도 : 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역서 작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문업체 등이 포함된 실질적인 관련주체의 조직도 작성

⑤ 품질관리계획서

⑥ 분야별 참여기술자 보안각서(반드시 참여기술자 본인의 자필서명)

⑦ 설계용역 예정공정표

⑧ 계약금액에 대한 용역비 산출내역서

⑨ 하도급 승인(예정) 신청 등 기타 발주처의 승인이 필요한 사항

⑩ 기타 설계용역 업무수행에 필요한 사항

2. 용역수행자는 용역 예정공정표상의 완료일 이전에 각종 서류를 작성⋅제출하여 발주처의 검토⋅확인 후 결정한다.

1) 기본설계, 실시설계 검사원

2) 각종 조사보고서 및 측량성과표

3) 사업진행과 관련된 제반법령 및 조례 검토서

4) 관련기관 협의, 허가 및 각종 인증에 필요한 서류 등

3. 업무협의 및 공정보고

1) 업무협의

① 용역수행자는 착수신고서 제출 또는 세부 과업 수행 계획서 제출 시 발주처와 1차 업무협의를 한다.

② 과업 수행과정 중 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에는 수시로 발주처와 업무 협의를 하여야 한다.

2) 진행보고

① 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토 시

② 각종 심의 및 자문회의(필요시)

③ 성과품 작성 및 준공계 제출 전

④ 기타 발주처의 요청이 있는 경우

4. 용역수행자는 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 실시 공정보고서(용역수행 대표자명의)를 작성하여 발주처에 보고하여야 한다.

1) 주간공정보고 : 매주 월요일에 전주 공정 보고(주말기준 작성 익주 월요일 제출)

2) 월간공정보고 : 제출일정 별도협의

3) 수시보고 : 발주처 요청 시 설계진행 사항 보고

5. 기타 사항

1) 심의 수행(필요시)

2) 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 회의 준비 및 기타 발주처에서 요구하는 사항

4) 발주처에서 제시하는 각종 기준에서 변경이 생길 경우 반드시 사전 협의하여 진행하도록 한다.

6. 기타 용역업무 수행에 필요한 사항

1) 본 과업을 수행함에 있어 발생될 수 있는 문제점 및 해결방안

2) 업무협의 결과보고서 등

제2장 분야별 설계지침

□ 일반사항

1. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한, 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 용역수행자 임의로 판단할 수 없으며, 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2. 인테리어, 전기, 기계, 통신, 소방 및 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 과업지시서의 기준 이상으로 한다.

3. 관계분야(인테리어, 전기, 기계, 통신, 소방 등) 실시설계는 해당 관련법상 설계자격 보유자가 실시하도록 하며, 계약 후 관련 증빙서류를 발주처에 제출해야 한다.

4. 본 건물 준공도서 등을 사전에 검토하여 기존 건축물의 마감, 급⋅배수관로 위치, 전기⋅통신 인입점, 소방시설 현황, 폐자재 운반로 등 현장여건 조사를 철저히 한 후 이를 설계에 반영하여야 한다.

5. 장애인 등에 대한 편의시설 설치 및 건설폐기물 처리 등은 관련법규에 맞게 설계에 반영하여야 하고 에너지절약 및 환경 친화적인 건설공사를 위한 공법, 설계개념을 적용한다.

6. 기능인력 및 자재수급을 고려하여 건식공법을 충분히 검토하여야 하며, 공사에 필요한 시공공법 및 건축자재 등은 국내자원을 최대한으로 활용 할 수 있도록 설계한다.

7. 전체 공사비용이 추정공사비 내에서 이루어질 수 있도록 계획하고, 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 기본조사 내용을 반영하여 설계하여야 하며, 설계도서 및 내역 산출 오류로 인한 설계변경 사유가 발생할 경우 이에 대한 책임을 다한다.

8. 설계도서에 요구되는 성능과 규격, 재질을 구체적으로 명시하여야 한다.

9. 각종 자재마감 및 색채계획 등은 기존 건축물과 어울리게 하여야 하고, 인접한 시설에 직⋅간접적인 피해가 발생하지 않도록 주변 환경을 철저히 조사⋅분석하여 공사시행과정에서 예상되는 유⋅무형의 손실을 최소화 할 수 있도록 설계하여야 한다.

10. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등 관련법규에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목(가구 등 기성품 포함)을 검토하여 별도로 분류하고 발주처와 협의 후 반영 한다.

1) 직접구매 대상 품목 중 제작설치가 필요한 품목은 즉시 발주가 가능토록 별도의 설계도서 (도면 및 시방서, 내역서 포함)를 작성하여야 한다.

2) 비제작(기성품) 자재는 인테리어 개념을 고려하여 구입목록(조달우수제품, 기술개발제품 등 우선 구매)을 조사⋅작성한 후 구입방법 및 절차를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

11. 기타 발주기관이 요구하는 사항을 반영한다.

12. 용역수행자는 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 중대과실로 발주기관에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다.

□ 조사 및 계획업무

1. 현지조사

1) 용역수행자는 현지 답사하여 현지 조건등을 상세히 파악하고, 공사에 필요한 공간 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

2) 현지 조사 결과, 과업수행에 불가능한 시설물 또는 이설이 필요한 시설물에 대하여서는 설치 가능 여부와 신설 구조물 위치에 대한 도면 및 현장 사진을 포함하여 제출하여야 한다.

2. 지장물 조사

지장물 이설이 필요한 시설은 해당 기관 및 발주기관 사전 협의를 거친 후 이설가능 여부를 정확히 판단하여 이설비 산출내역을 받아 설계에 반영하여야 한다.

3. 구조물조사

1) 계획 시설물 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황을 조사하여야 한다.

2) 기존 구조물에 대하여 충분히 조사하여 본 설계와의 연계성 등을 검토하여 설계에 반영한다.

4. 소음 ․ 진동 및 분진발생 조사

1) 시설물 설치 공사 시 소음, 진동 및 분진 발생으로 시민의 불편 및 환경오염으로 인한 문제를 해결하기 위하여 공사로 인한 소음, 진동을 예측하여 이에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

2) 특히, 동탄복합문화센터 이용객들의 안전하고 쾌적한 센터 이용을 위하여 공사구간에서 발생하는 소음, 진동, 분진을 고려하여 공사구간과 고객이동 동선의 분리를 위한 가설계획을 수립하여 설계에 반영한다.

□ 공간 디자인 분야

1. 용역수행자는 채택된 디자인 제안서를 바탕으로 수정⋅보완 협의 완료된 최종디자인 보고서를 작성하여 제출 및 프리젠테이션을 실시하며, 보고서에는 디자인에 참여한 참여기술자 명단 및 그의 업무수행 사항등을 기록하여 제출 한다.

2. 디자인(최종) 보고서 수록 내용은 아래와 같다.

1) 디자인 컨셉 및 그에 대한 시각화

2) 내부 동선계획 및 디자인 스토리텔링

3) 디자인의 구체화와 적용디자인 이미지

4) 디자인이 적용된 공사범위 전체에 대한 부위별 고퀄리티 3D 입체 투시도

5) 디자인의 현실화에 소요되는 계략공사비

6) 기타 발주처에서 요구하는 사항

□ 인테리어 분야

1. 본 건축물의 건축적인 특성을 고려하여 Project1은 참여형 문화복합 공간으로서의 기능과 Project 2는 통합사무실로 재구축되는 공간의 기능성과 효율성이 뛰어나도록 설계하여야 한다.

2. 내부시설물은 다목적, 다기능적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계하여야 하며, 공간계획은 장래 기능 및 수용시설의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 공간의 호환성과 유연성을 최대한 고려하여야 한다.

3. 본 건축물의 충분한 사전조사를 통하여 경제성과 안전성을 종합적으로 고려하여 합리적으로 설계하여야 한다.

4. 인테리어 설계계획은 아래 사항을 기준으로 하되 아래와 관련된 사항을 종합적으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

1) 내부 공간 디자인과의 동일성

2) 각 실별 구획 및 인테리어 마감

3) 신설되는 공간에 대한 인테리어 마감 및 제작가구 설치

4) 일반 사무공간내 비제작가구(기성품) 가구집기 배치 등 상세 Lay-Out

5) 비제작가구 발주를 위한 대상 목록의 작성 및 구입 상세 계획 수립

6) CI 및 안내 사인물 계획 등

7) 기타 효율적 공간 조성을 위한 인테리어 관련 설계 일체

5. 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며 유지⋅보수⋅사후관리가 용이하도록 설계되어야 한다.

6. 인테리어 관련 시설물은 주위환경과 조화되고, 사용자에게 밝은 느낌과 친밀감을 줄 수 있도록 설계하여야 하며, 마감재는 친환경적이며, 유지관리가 용이하고, 화재 및 방수에 강한 자재로 설계한다.

7. 주요 마감재의 결정은 발주처의 승인을 득하여 설계에 반영토록 하고, 친환경 자재를 적극 검토하여야하며, 유지관리비가 적게 들고 내구성이 좋으며, 준공 후 대체 구매가 용이한 자재를 우선 고려토록 한다.

8. 국산 자재를 우선적으로 검토하여야 하며, 부득이한 경우 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 발주처의 승인을 득한 후 수입재를 설계에 반영할 수 있다.

9. 기타 전기, 설비, 통신, 소방 등 인테리어 관련 설계내용을 종합적으로 검토․협의하여 관련 공종간 시공에 대한 간섭 문제가 없도록 최적의 설계를 하여야 한다.

10. 구조변경 및 보강이 필요한 부분이 있으면 이에 대한 구조검토 진행 후 설계에 반영하여야 한다.

11. 본 사업의 성과물과 관련하여 지적재산권 분쟁이 있을 경우, 용역수행자가 모든 법적 책임을 집니다.

12. 용역수행자는 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 피행 발생시 이에 대한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 다해야 한다.

□ 설비분야(전기, 기계, 통신, 소방 등)

1. 각 분야 설비는 건축물의 용도 및 기능을 고려하고, 보안성, 에너지 절감, 경제성, 운영성, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 적합한 설비를 적용한다.

2. 충분한 자료를 수집하고, 개량된 선진설비 방식과 비교⋅검토하여 최적안을 설계에 반영토록 한다.

3. 인테리어 공정과 연관되는 부분을 면밀히 검토하여 설계에 반영하고, 원활한 시공 및 기능을 유지토록 하여야 한다.

4. 설비공간은 향후 장비교체, 유지관리 space 등을 충분히 고려하여 위치, 면적, 층고 및 장비 반입구를 확보하여야 한다.

5. 초기투자비, 유지관리비, 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적으로 설계한다.

6. 각 분야 설비의 설계 시 분야별로 최적의 설비를 설계하되 기존 본건물 설비와의 연계성을 검토하여 설계하여야 한다.

7. 기계설비 계획 시 아래 사항을 검토한다.

1) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따른 설계 실시

2) 본 건물 자동제어시스템 등 기계설비에 대한 사전 검토 후 이를 설계 시에 반영

3) 급⋅배수 필요시설(탕비실, 휴게실, 화장실 등)에 대한 위생설비 설치 계획

4) 특수시설에 대한 공조설비(개별 공조 또는 토출구 조정 등) 및 냉⋅난방설비 계획

5) 급배수 시설에 대한 급수량 산정, 급수 대상인원 산정, 급탕방식의 결정, 배수방식, 통기방식 등의 기초계산 및 각 방식 선정의 적정여부 검토

6) 급수 조닝 및 관말 수압, 용량 및 부속품 취부의 적정여부 검토 등

8. 전기설비 계획 시 아래사항을 검토한다.

1) 본 건물 전기 인입 및 배관, 배선설비에 대한 사전 검토

- 각층 평면 상세도 ․ 각 부분 상세도

- 각 SHAFT 주위도(배관 배치도) ․ 기기 상세도

- PANEL 관계 상세도, MAKER 상세도

- 천장 배치도(등기구, 스피커, 스프링클러 헤드, 급배기 디퓨져 등)

2) 실 별 구획 등 인테리어에 따른 전기 배관⋅배선 등 전력간선 설비의 경로배선 포설방식 및 사용 전선류의 허용전류 및 전압 강하계산에 의한 적정규격, 접지선, 조명방식⋅기구 등을 결정

3) 인테리어 조명 및 각 실별, 개인사용자를 위한 전등, 전열설비의 구성 및 배치

4) 전산센터 내 기반설비 구축을 위한 전기설비(항온항습설비, UPS 설비 등)는 제외하되, 연결설비는 포함

5) 기계설비, 통신 등의 설비부하 및 기타 전원설비 내용을 충분히 숙지하여 전원설비 일체를 고려한 전기설비 계획 검토

6) 무대부분에 공연을 위한 조명시설 설치계획 검토

9. 통신설비 계획 시 아래 사항을 검토한다.

1) 본 건물 정보통신시스템에 대한 사전 검토

2) 업무공간 내 통신회선수 및 케이블 규격 등 내선 구성 및 자재선정

3) 각 실별 면적 및 용도에 맞게 필요시 벽부형 또는 바닥형 수구설치

4) 전력선과 법적 이격거리 준수 등

5) 본 건물 통신설비(음성 및 데이터 등)의 말단에서부터 개인사용자 좌석 또는 특수시설 내부의 내선 연결 계획

6) 인테리어 구역 내부 출입통제시스템 및 CCTV 설치 계획 및 건물통합방재센터와의 연결 계획(공동모니터링이 가능해야 함)

7) 발주처 지정 특수시설(통합사무실, 방재실 등)에 대한 AV시스템 및 전관방송 설계

- TV공청설비 : 유선TV, 위성방송 및 IPTV 수신설비를 비교⋅검토하고 기존 설비와의 연계성을 검토하여 설계

8) 무대부분에 공연을 위한 음향시설 설치계획 검토

9) 기타 인테리어 구역 내 정보통신시스템 설치와 관련한 일체의 사항 검토 및 타 공종과의 연계성을 고려한 설계

10. 소방설비 계획 시 아래 사항을 검토한다.

1) 본 건물의 소방설비시스템에 대한 사전검토 후 기존 설비와의 연계성을 검토하여 설계에 반영

2) 실내 인테리어 구획에 따른 감지기 및 스프링클러 등 소방시설의 설치계획 등

3) 감지기 및 스프링클러 등 소방방재시설의 종류 및 수량은 관련법규에 따라 용도와 면적에 맞게 설계

4) 용도 및 장소별 피난 유도등과 통로 유도등 설치(필요시)

5) 기타 인테리어 공사에 따른 소방․방재설비 관련 사항에 대한 전반적인 검토 등

11. 기타

1) 일체의 설비분야 설계는 본 인테리어 설계용역의 취지 및 목적에 부합하도록 전반적으로 검토하여야 하며 모든 설비에 대한 계획은 본 건물 기존 설비와의 연계성을 고려하여 최적의 방안으로 구성되어야 한다.

2) 기타 전기, 기계, 통신, 소방 등 최적의 설비구성을 위해 본 과업지시서의 범위내에서 발주처에서 요구하는 사항을 설계에 반영하여야 한다.

12. 각종 심의 및 자문준비

용역수행자는 발주처로부터 각종 심의 및 자문의 시기, 내용 등에 대한 계획이 통보되면 자문이 효율적으로 시행될 수 있도록 필요한 자료를 기한 내 작성하여 제출하여야 한다.

13. 설계자문(외부 전문가)

외부전문가 설계자문은 과업수행 중 중요 사안 결정 및 발주처의 설계 적정성 검토가 필요하다고 판단되는 경우에는 실시하여야 한다.

14. 각종 심의 및 자문 결과 반영

용역수행자는 심의(자문) 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석 ․ 검토하여 발주처에 조치계획을 보고하여야 하며 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

15. 기타사항

1) 본 과업수행 기간 중 발주처는 상기 내용과 별도로 필요할 경우 본 과업의 설계 사항을 수시 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 용역수행자가 준비하여야 한다.

2) 각종 심의(자문) 일정 및 횟수는 발주처와 협의 후 필요시 변경 가능하다.

3) 각종 심의(자문) 개최에 필요한 제반사항은 용역수행자가 수행하여야 한다.

16. 공사비와 예산

1) 용역수행자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주처와 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

2) 개산 견적과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 용역수행자는 용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

17. 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 전문인력(기술자)이 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급 ․ 경력을 갖춘 전문인력(기술자)으로 발주처의 승인을 받아 교체하여야 한다.

18. 기타

1) 본 설계용역에 적용하는 설계기준 및 시방서는 가장 최근의 자료를 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주부서와 협의하여 적용한다.

2) 건축, 토목, 조경, 전기, 기계, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 표준시방서 및 각 분야별 전문시방서에 의거 수행하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한 제반사항은『건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 2016-1025,‘16.12.30)』및『건설기술 용역관리 편람(건축편, 2014. 8.)』을 준용한다.

3) 용역수행자는 과업수행계획서에 설계 시 적용 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

제3장 설계도서의 작성 및 납품

□ 기본사항

1. Project 1과 Project 2는 설계도서 납품 시 Project별로 인테리어 공사의 별도 발주가 가능토록 설계도서를 구분 작성하여 납품한다.

2. 설계도서는 필요시 공종별로 분리발주가 가능토록 인테리어, 전기, 기계, 통신, 소방 등으로 구분하여 작성하되 기타분야는 인테리어공사 분야에 포함한다. 다만 분리가 곤란하거나 분리의 필요성이 없다고 인정되는 경우 발주처와 협의하여 이를 변경 할 수 있다.

3. 상기도서 제작 중 중복이 있을 때는 단일화 할 수 있으며 동일도면에 복합할 수 있다.

4. 본 공사에 소요될 주요 자재 중 관급으로 조달 구입하여야 할 주요자재는 조달관련법령 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원법령 등 관련 법률을 사전 검토하여 발주기관과 사전 협의 후 선정하여야 한다.

5. 건설기계, 인력, 자재 등의 관리계획에 의하여 공사예정공정표를 작성하여야 한다.

6. 용역 완료 후 Project별 용역(최종)보고서를 결과물로 제출하고 설계완료 PPT를 진행 하여야 한다.

□ 기본설계 도서의 작성

1. 기본설계 제출도서 목록

제출도서 목록	규격	수량	비고
현장조사 보고서	A4	2	현장답사를 통한 현황조사 내용
보고용 판넬 및 PPT 파일	A2	각 1식	건축개요, 전층 사무실 배치도, 주요시설 투시도 및 설계설명서
기본설계 보고서	A3	2	분야별 건축계획서, 법규체크리스트, 개략공사비 내역서 등
기본설계 도면	A3	2	각 분야별 도면(심의용 도면 포함-필요시)
마감 및 색채계획서	-	2	주요시설(바닥,벽,천정) 마감재 사양 및 색상표(색상번호 기재), 색상대비표 등

2. 기본설계 도서의 작성

1) 용역수행자는 발주처로부터 제공된 자료와 조사 및 자료수집 내용을 근거로 인테리어 공사의 규모, 예산액, 기능성, 효율성, 미관적 측면에서 설계목표를 정한 후 기본설계에 착수하여야 한다.

2) 용역수행자는 기본설계 진행 전에 디자인 개념의 설정, 발주처의 요구조건 등을 사전에 협의한 후 이를 기본설계(안)에 반영하여야 한다.

3) 용역수행자가 제출한 안이 부적합하다고 발주처에서 검토 의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 안을 재작성하여야 하며 그로 인한 용역비의 추가 및 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

4) 발주처가 보완조건으로 설계(안)을 승인하면 용역수행자는 즉시 보완 ․ 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 실시설계를 진행한다.

5) 용역수행자는 기본설계 완료시 상기 “1. 기본설계 제출도서 목록”의 기본설계도서를 제출하여야 한다.

6) 현장조사 보고서 : 용역대상지의 현장답사를 통한 건물 현황 파악 및 기존 설비(건축 및 전기, 기계, 통신, 소방 등)의 체계 파악

7) 기본설계 보고서 : 분야별 설계개요 및 설계의도 설명, 전기⋅설비⋅통신⋅소방 등 계통도 및 기본설계 단계에서 필요 및 결정 사항을 모두 수록

8) 법규 체크리스트 : 적용이 예상되는 제반법규 및 단계별 법적절차의 검토

9) 개략공사비 내역서 : 기본설계 도서를 바탕으로 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 공사원가계산의 방법으로 분야별․공종별 개략공사비를 산정한다.

10) 기본설계 도면 : 기본설계의 원칙 및 기준에 따라 「공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가」 별표 2의 ②중간설계의 도서내용 상급 기준으로 공사 완료등을 위해 필요한 분야별 도면

11) 마감 및 색채계획서 : 발주처 지정 주요시설에 대한 마감재 및 색채계획 제출

(필요시 복수안 제출 가능)

□ 실시설계 도서의 작성

1. 실시설계 제출도서 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					인테 리어	전기	기계	통신	소방
1	용역(최종)보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	각 공종 취합 1부로 작성
2	실시설계도면(편철)	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
	실시설계도면(반책)	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	시공 가능한 상세공사비 산정
4	주요자재사양서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	최종 투시도(or 조감도)	A2	3	부	◯					주요시설별(발주처 요청시)
6	공사예정공정표		3	부						전 공종 포함
7	CD-ROM		2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	모든 도서내용 포함
8	기타 발주기관 요구사항		1	식	◯	◯	◯	◯	◯	보고용 설명서, PPT결과물 등

※ 주기 1) 도서수량 및 세부내용은 납품 시 발주기관과 협의하여 조정 가능

2) 내역서 : 내역프로그램결과물, 엑셀 호환변환파일 모두 제출

2. 용역(최종)보고서의 작성

1) 용역수행자는 최종 용역보고서를 제출하여야 하며, 보고서에는 설계에 참여한 참여기술자 명단 및 그의 업무수행 사항 등을 기록하여 제출하여야 한다.

2) 용역(최종)보고서의 수록 내용은 아래와 같다.

① 주요시설 투시도(발주처가 요청하는 경우)

② 각 분야별 설계설명서(설계개념 및 계통도 등)

③ 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정⋅보완 지시사항 및 조치결과, 기계설비 및 전기⋅통신 관련 시스템 등, 각종 자재의 선정사유 및 사용계획서, 시설물유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격(좌철)으로 제출(설계자 의도 포함 : 인테리어의 경우 입면 등 디자인 요소에 대한 개념 표현)

3. 실시설계 도면의 작성

1) 실시설계 도면은「공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가」 별표 2의 ③실시설계의 도서내용 상급 기준으로 사업 완료 등을 위해 필요한 분야별 도면으로 한다.

2) 기 설계되어 있는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주처의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품한다.

3) 도면작성에 있어 각 실의 명칭과 면적, 실 번호를 해당 실에 직접 기입하여야 하며 번호 및 부호등을 사용하여서는 안 된다. 다만 해당 실이 축척상 협소하여 기재가 곤란할 경우는 예외로 한다.

4) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장기술자들이 쉽게 이행하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

5) 단위는 미터법으로 표기(mm)하고, 숫자는 아라비아 숫자로 표기한다.

6) 문자는 한글 사용을 원칙으로 하며, 한글로 표기가 곤란한 경우 영문, 한자 등으로 병기 가능하다.

7) 약자는 영문에 한해서 통상적으로 사용되는 범위 내에서 사용하되, 반드시 약자 해설집을 목록란에 명기하여야 한다.

8) 설계도면의 축척은 설계도서 작성기준에 따른다.

4. 설계내역서의 작성

1) 설계내역서 작성 시「중소기업 직접구매 대상품목 지정내역 고시」(중소기업청고시, 작성일 현재 시행기준)에 따른 품목을 분류하여 목록표를 작성하고 발주처와 협의 한다.

2) 내역서의 작성은 인테리어 공사 작업 순서대로 작성하고, 실제 공사가 가능토록 상세하게 작성 한다.

3) 수량의 산출은 설계변경 시 물량증감이 용이하도록 공종별, 층별, 부위별로 산출하고 계산식을 분명히 하여야 한다.

4) 일위대가 적용은 정부 일위대가표에 준하여 작성하되 내역서에 첨부하여 철한다.

5) 국내 재료의 단가는 다음에 열거한 방법에 의거 결정 한다.

① 국토교통부발행 실적공사비, 일위대가

② 조달청발행 정부구매물가 가격정보(나라장터)

③ 대한건설협회 발행(월간) 거래가격 - 시중 노임단가 적용

④ 사단법인 한국물가협회발행(월간) 물가자료

⑤ 사단법인 한국물가정보 발행 종합물가 정보지

6) 위 물가시세표 등에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 견적서(2개 업체 이상)에 의하되 원가 견적서를 첨부하여야 하며 필요시 원가조사기관에 조회하여 결정할 수 있다.

7) 운반공사에 사용되는 장비, 운반지(사토장 등), 운반거리, 도로상태 등을 조사하여 내역서, 공사시방서에 명확히 표기하여야 한다.(필요시)

5. 시방서의 작성

1) 표준시방서를 기준으로 설계 내용에 부합되도록 공사 시방서를 작성하며, 표준 시방에 없는 공종인 경우 별도 전문시방서를 작성한다.

2) 신공법 적용시에는 공법에 대한 설명과 이에 따른 관계자료 등 검토보고서를 제출하고 담당 감독관과 협의하여야 하며 협의 후 관계 자료를 첨부한다.

3) 제출양식은 A4 좌철제본으로 하고, 표지에 수행 용역명, 일자 및 30㎜×30㎜(가로×세로)의 정사각형을 표지 좌측 상단에 표기 후 관리번호를 부여한다. 또한 식별이 용이하도록 제본되는 마구리면에 용역명 및 설계도서명, 공종을 구분하여 명기한다.(특기시방서, 내역서 표지 양식 공통)

4) 시방서 내용은 본 공사의 진행에 필요한 부분을 선정하여 현장 및 공사 여건에 맞게 기술한다.

6. 보고용 설명서의 작성

1) 수록내용 : 설계개요, 주요시설 투시도, 도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등)

2) 제출양식 : A2 size(반접)의 5㎜ 폼보드를 사용 및 PPT(파워포인트)

7. 제출된 설계도서에 대한 하자

용역수행자는 설계도서 작성의 불합리 등으로 발생하는 하자는 물론 설계자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로서 발생되는 형⋅민사상 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 금전적 손실까지 변상의 의무를 책임져야 한다

8. 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공 중에 불분명한 부분이 발생될 경우에는 우리재단의 요구에 따라 필요할 설계(변경)도서를 작성하여 제출하여야 한다.

02

과업지시서〔설계부분〕

【붙임 1】

03

관련서식

보 안 각 서

용  역  명 :

계약  일자 : 20  .  .  .

착수  일자 : 20  .  .  .

완수예정일 : 20  .  .  .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

다        음

1. 본인은 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행 과정에서 알게 된 정보 또는 기밀 사항을「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주처에 유⋅무형의 손해가 발생되는 경우에는 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 따라 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 관련 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주처에 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2019년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

담  당  분 야 :

성        명 :                      (인)

화성시문화재단 귀중

【붙임 2】

책 임 기 술 자 선 임 계

소        속 :

성        명 :

주        소 :

주민등록번호 :

기술면허종별 :

면 허  번 호 :

상기인을 OOO공사 설계용역의(건축,기계,소방,전기,통신,토목,구조,조경) 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며(건축,기계,소방,전기,통신,토목,구조,조경) 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임 : 1. 경력증명서 원본  1부.

2. 재직증명서      1부.

3. 자격증 사본     1부. 끝.

2019년     월    일

계 약 자

상    호 :

주    소 :

대표이사 :                 (인)

화성시문화재단 귀중

【붙임 3】

하도급승인요청서

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

도급  금액 :

공      종 :

상      호 :

주      소 :

대  표  자 :

자      격 :

붙      임 :  1. 하도급 지명원  1부.

2. 계약서 사본    1부.  끝.

상기인에게  OO분야 설계용역을 하도급 하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2019년     월    일

계 약 자

상    호 :

주    소 :

대표이사 :                 (인)

화성시문화재단 귀중

【붙임 4】

(기본, 실시)설계검사원

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

계약  금액 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

위와 같이 (계획, 중간, 실시)설계용역이 완료되어 설계검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019년     월    일

계 약 자

상    호 :

주    소 :

대표이사 :                 (인)

화성시문화재단 귀중

【붙임 5】

월간공정보고

설계  용역명 :

설계용역기간 :

보 고  일 자 :

보   고   자 :                                (인)(건축책임기술자)

공정보고내용 : 1. 전체 공정의 진행상황(예정/실시)

2. 전월 작업내용/금월 예정 작업내용

3. 인원투입현황 및 외주작업현황(단위는 시간으로 표기)

4. 공정진행상의 문제점 및 해결책

5. 기타사항

2019년     월    일

계 약 자

상    호 :

주    소 :

대표이사 :                 (인)

화성시문화재단 귀중

【붙임 6】

주간업무보고

용 역 명						보 고 자
총 공 정		예 정		실 시
금 주 공 정
월일	전주 업무수행 실적( . . ~ . )			월일	금주 업무수행 계획( . . ~ . )
. (월)				. (월)
. (화)				. (화)
. (수)				. (수)
. (목)				. (목)
. (금)				. (금)
. (토)				. (토)

상기와 같이 전주의 업무수행내용과 금주의 업무수행계획을 보고 드립니다.

2019년   월   일

직책/성명 :                    (인)

화성시문화재단 귀중